水道事業建設工事検査規程
令和8年4月1日
水道事業管理規程第18号
(趣旨)
第1条　この規程は、安房郡市広域市町村圏事務組合財務規則(昭和58年規則第1号)の規定に基づく検査のうち、水道部管理課が行う工事の検査(以下「検査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条　この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)　事業担当課長　工事を発注する課の長をいう。
(2)　建設工事　建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事をいう。
(3)　検査員　地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定により水道部長に検査を命ぜられた職員をいう。
(検査の範囲)
第3条　検査は、設計金額が200万円を超える建設工事を対象とする。ただし、災害復旧工事、委託により検査を行う工事及び修繕工事は、検査の対象から除くことができる。
(事務の総括)
第4条　管理課長は、検査に関する事務を総括する。
2　管理課長は、検査に関し必要があると認められるときは、事業担当課長に対し報告及び意見を求めることができる。
(検査)
第5条　検査員は、管理課総務係長(以下「検査係長」という。)が指定する検査の実施その他検査に関する事務の執行に当たる。
2　検査係長は、前項の検査に関し検査員を指揮監督する。
3　検査の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1)　完成検査　建設工事が完成したときに、その適否を判定するための検査をいう。
(2)　出来形検査　建設工事の受注者に請負代金の部分払をしようとするとき、又は建設工事の契約の解除に伴う打切精算をしようとするときに行う、建設工事の出来形部分を確認するための検査をいう。
(3)　中間検査　建設工事の施工途中において行う検査をいう。
(検査の報告等)
第6条　検査は、事業担当課長が建設工事の受注者から工事完成(出来形・中間)通知書(以下「通知書」という。)を受理した日から起算して14日以内に完了するものとする。
2　事業担当課長は、通知書を受理した日から5日以内に工事完成(出来形・中間)報告書(様式第1号)により管理課長に報告するものとする。
3　管理課長は、前項の報告があったときは、当該報告に係る検査に当たる検査員を指定し、工事検査実施通知書(様式第2号の1)により事業担当課長に通知するものとする。
4　事業担当課長は、前項の規定により工事検査実施通知書を受理したときは、工事検査実施通知書(様式第2号の2)により当該工事の受注者にその旨を通知しなければならない。
(検査の立会い)
第7条　検査員は、検査に当たり事業担当課長又は事業担当課長が命ずる職員及び当該検査に係る建設工事の受注者を立ち会わせるものとする。
(検査の方法)
第8条　検査は、工事実施設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)並びに契約書、工事写真、施工管理記録及びその他の関係図書に基づいて工事の実施状況、出来形及び品質を千葉県建設工事検査基準により検査し、その適否を判断するものとする。
2　地下、水中、仕上内部面及びその他外部から検査を行い難い部分については、前項の規定によるもののほか、監督員の確認、下検査、写真記録又は記録資料により検査することができる。
3　完成検査、出来形検査又は中間検査を行う場合は、当該検査に必要な範囲内において破壊又は分解により試験をして検査することができる。
(復命)
第9条　検査員は、完成検査を実施したときには、その結果について実施した日から5日以内に工事検査調書(様式第3号)に工事成績評定表を添付し、管理課長に復命するものとする。
(工事の修補又は改造の指示等)
第10条　管理課長は、検査員が行った検査により出来形、品質、出来栄えが契約書、設計図書及びその他の関係図書と相違し、又は不完全と認められるときは、工事検査指示書(様式第4号)により修補又は改造を事業担当課長に指示しなければならない。ただし、修補又は改造が軽微であると認めたときは、口頭により指示することができる。
2　事業担当課長は、前項の指示を受けたときは、工事検査指示書により当該検査に係る建設工事の受注者に修補又は改造を指示するものとする。
3　管理課長又は事業担当課長は、第1項の修補又は改造が極めて重大であると認めたときは、速やかに水道部長に報告するものとする。
(工事の修補又は改造の検査等)
第11条　第6条から第9条までの規定は、修補又は改造工事の検査等について準用する。
(認定通知書)
第12条　管理課長は、検査員が行う当該検査に係る建設工事の完成(出来形・中間)について認定するものとする。
2　管理課長は、前項の認定をしたときは、工事認定通知書(様式第5号)に工事検査調書を添付して事業担当課長に通知するものとする。
3　管理課長は、第1項の認定をしたときは、当該認定に係る建設工事の受注者に工事検査結果通知書(様式第6号)により通知するものとする。
4　管理課長は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、工事成績評定表の見直しを行い、当該建設工事の受注者に対し、前項の工事検査結果通知書により通知するものとする。
(検査事務の整理)
第13条　検査係長は、工事検査台帳(様式第7号)に必要事項を記録し、整理するものとする。
附　則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。